□문화재 수리정보 DB 및 수리 이력관리 통합 BIM 모델링□ 과업 추진 계획서

2021. 1.

Ⅰ		추진개요

1. 과업명 : ‘문화재 수리정보 DB 및 수리 이력관리 통합 BIM 모델링’ 용역

2. 과업의 목적

□ 국가지정 건조물문화재 수리 이력 관리를 위해 관련 기록물을 통합하고 기록 정보를 분석‧데이터베이스화함으로 문화재 보존가치를 확보하고자 함

□ BIM을 기반으로 문화재수리 통합데이터모델을 구축하여 문화재별 수리 이력과 부재별 이력 정보를 관리하는 기초데이터 확보

□ BIM 기반 3D 데이터를 통해 각 부재 특성에 대한 입체적 검토를 가능하게 하며, 향후 해당 문화재 각 부재의 유지 관리 및 수리시 교체 등의 업무에 활용함

3. 과업기간 : 착수일로부터 2021년 12월 5일까지

4. 소요예산 : 일금 사십오억육천만원정(￦4,560,000,000)  ※부가가치세 포함

5. 과업대상 : 국보‧보물 목조건조물문화재 27건

※ 자료 현황에 따라 대상 변동 가능

차수	대 상		용역비
	3단계(해체실측)	2~3단계(일부 해체, 정밀실측)
1	봉정사 극락전(국보15), 봉정사 대웅전(국보311)	창덕궁 인정전(국보225), 개심사 대웅전(보물43)	6.5억원
2	경복궁 근정전(국보223), 화암사 극락전(국보316)	부석사 무량수전(국보18), 부석사 조사당(국보19)	6.4억원
3	용문사 대장전(국보328), 환성사 대웅전(보물562)	수덕사 대웅전(국보49), 화엄사 각황전(국보67)	6.5억원
4	법주사 대웅보전(보물915), 신륵사 조사당(보물180)	법주사 팔상전(국보55), 도갑사 해탈문(국보50)	6.5억원
5	진남관(국보304), 송광사 하사당(보물263)	경복궁 경회루(국보224), 송광사 국사전(국보56)	6.5억원
6	무위사 극락보전(국보13), 팔달문(보물402)	은해사 거조암 영산전(국보14), 세병관(국보305)	6.6억원
7	임영관 삼문(국보51), 금산사 미륵전(국보62)	해인사 장경판전(국보52)	6.6억원
총액			45.6억원

6. 추진방식

□ 계약방법 : 협상에 의한 계약

* 근거:「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」제7조 및 동법 시행령 제43조「협상에 의한 계약  체결기준」(기획재정부 계약예규 471호(2020. 12. 24.)  「문화재청 협상에 의한 계약 제안서 평가 업무처리 규정」(문화재청 예규    제226호(2020.11.25.))

❍ 입찰방법 : 제한(총액) 협상에 의한 계약

- 다음 각 호의 자격을 모두 갖춘 자(각 호별 상호 기술보완이 가능한 업체가 공동도급(공동·분담이행방식)으로 참여 가능)

가. 문화재수리 등에 관한 법률 제14조에 따른 문화재실측설계업(1121)로 등록한 자 또는 소프트웨어산업진흥법 제24조 제1항에 따른 소프트웨어사업자(1468)로 등록한 자

나. 학술연구용역(1169)으로 등록한 자

7. 추진체계

		※ 사업 설명회, 착수 보고 및 자문회의(개별 업체)
수리기록 통합 수집․아카이브		•해당 문화재수리 관련 기록 통합 수집 •수집 기록 분류 및 아카이브
↓
수리기록 분석 및 정보‧이력 DB		•수리기록 기반 수리 정보 분석 및 DB •수리 이력 및 부재 이력 DB
↓		※ 1차 워크숍 및 통합 자문 실시(중간보고)
수리이력 표준 도면 마련		•수리 DB 데이터 기반 BIM 구축 기준 도면
↓
수리이력 관리 BIM 모델 제작		•대상별 표현수준을 적용한 BIM 모델 제작
↓		※ 2차 워크숍 및 통합 자문 실시
개별 수리이력 관리 통합 BIM 구축		•부재별 이력‧속성 정보 및 참고자료 입력
↓		※ 최종 보고 및 자문회의(개별 업체)
완료보고서 작성, 데이터 검수

							문화재청 (수리기술과)
							전통건축수리기술진흥재단
자문위원회 (분야별 내‧외부 전문가 5인 이상)
							주관사업자
							학술연구 (수리 정보DB)							실측설계 (수리이력 BIM 구축)

구 분	역 할
문화재청 (수리기술과)	ㆍ문화재수리 이력 데이터 총괄 관리 ㆍ문화재수리 이력 관리시스템 구축 총괄 ㆍ문화재수리 이력관리 BIM 적용지침 관리 ㆍ기준, 구축지침 등 의견 개진, 분야별 전문가 추천 ㆍ문화재청 각 부서 및 지자체 보유자료 협조
전통건축수리기술 진흥재단	ㆍ문화재수리 이력 데이터 관리 및 수리 이력 관리시스템 구축 주관 ㆍ문화재 수리정보 DB 매뉴얼 관리 ㆍ연차별 DB구축 대상 선정, 사업계획 수립, 제안요청서 작성 ㆍ사업자 선정, 협의체 구성, 사업수행 관리 ㆍ사업 진도 및 인력관리, 용역 성과 품질관리 ㆍ산출결과물 검수ㆍ검사 등
자문위원 (내·외부전문가)	ㆍ문화재청, 유관기관, 전문가(산·학·연) 등으로 구성 ㆍ대상 문화재 유형별 특성 및 수리 이력‧기술 정보 자문 ㆍ문화재 수리이력 BIM 작성 지침 검토 및 BIM 결과물 활용 방안 자문 ㆍ관련분야 : 건축학, 전통건축, 문화재수리, BIM, 정보화전략 전문가, 해당 문화재 공사 참여진(필수) 등
주관사업자	ㆍ개별문화재 수리이력 및 기술정보 DB 통합 구축 ㆍ문화재 가치 및 수리 기술기법 관련 학술연구 ㆍ문화재수리 이력 관리 통합 BIM Model 구축 및 통합정보 입력 ㆍ문화재 유지보수 BIM데이터 기록보고서 작성 등

Ⅱ		과업 세부내용

1. 개별문화재 수리이력 기록 및 정보 DB(학술연구)

□ 문화재수리 기록 통합 수집 및 아카이브

- 대상 문화재 수리가 여러 건일 경우 각 수리건을 모두 정리함

- 수리/감리보고서, 설계도서/준공도서, 각종 행정문서, 수리 전후도면(3D 스캔 데이터 포함), 상세도면, 수리전후사진, 과거사진, 각종 조사 정보(실측, 정기조사, 안전점검 등) 등을 포함

- 해당 공사 참여자(시공사, 현장대리인, 지자체, 자문위원) 개인 소유 자료를 협조를 받아 수집함

- 문화재청, 국가기록원 등 국가기관 소유 자료는 발주처와 협의 후 기록물을 수집함

- 수집 기록물은 전자문서를 기준으로 함

□ 문화재별 수리정보 분석 및 수리건별 상세 수리 기술 정보 DB

(기본 매뉴얼은 발주처에서 제시함)

- 아카이브 자료를 활용하여 각종 수리 기술정보 및 통계정보를 분석하여 정리함

- 수리이력 총괄 및 부재별 수리이력 DB, 수리기술정보 DB, 수리보존가치 연구 등

- 대상 문화재 수리가 여러 건일 경우 각 수리건을 모두 정리함

2. 문화재 수리이력 관리 통합 BIM 모델링(실측설계)

□ 문화재 이력 데이터 기준 BIM 구축을 위한 표준 도면 마련

- 수집된 자료가 다수의 수리와 실측으로 부재 형상과 정보가 상이할 경우, 이력 DB 결과에 의해 원형을 고증한 경우 등을 종합하여 수집, 분석, DB화된 데이터를 기반으로 수리 이력이 반영된 최종 현황도면을 표준으로 작성

□ 수리이력 관리 통합 BIM 모델링 구축(BIM 적용지침은 발주처에서 제시함)

- 수리 기록정보 및 표준 도면을 바탕으로 BIM Data Model을 작성하고, 분류체계를 적용하여 부재별 모델을 마련, 부재별 이력‧속성 정보와 관련 자료 등 통합정보를 입력함

□ 문화재 가치부터 수리 이력, 주요 수리 기술․기법 등을 정리하여 해당 문화재 유지보수에 활용할 수 있는 BIM데이터 모델 기록보고서 작성

Ⅲ		중장기 추진 계획

년도 사업	2021	2022	2023	2024	2025
수리 이력 DB 구축 및 BIM 모델링	￭ 문화재 수리 기록 통합 수집, 이력 분석 및 DB구축, 기준 도면 작성
	‧ 이력 DB(1차) - 국보보물 목조 27건	‧ 이력 DB(2차) - 국보보물 목조 43건	‧ 이력 DB(3차) - 보물 목조 43건	‧ 이력 DB(4차) - 보물 목조 43건	‧ 이력 DB(5차) - 보물 목조 45건
	‧ 수리이력 DB작성 매뉴얼 개선		‧ 수리 정보 DB 관련 정책 제안
	￭ 문화재수리 이력관리 BIM 구축
	‧ BIM 적용 지침 마련 [문화재청]	‧ 적용 지침 개선
	‧ BIM 모델링(1차) - 국보보물 목조 27건	‧ BIM 모델링(2차) - 국보보물 목조 43건	‧ BIM 모델링(3차) - 보물 목조 43건	‧ BIM 모델링(4차) - 보물 목조 43건	‧ BIM 모델링(5차) - 보물 목조 45건

참고		문화재수리 이력 DB 구축 총괄 대상별 현황

	지정구분		문화재명	해체범위	실측여부	비고
1	국보	제15호	안동 봉정사 극락전	완전 해체(2003)	-
	국보	제225호	창덕궁 인정전	-	실측(1998)	월대 포함
	국보	제311호	안동 봉정사 대웅전	도리 이상(2004)	-
	보물	제143호	서산 개심사 대웅전	공포 이상(2007)	실측(2001)
2	국보	제18호	영주 부석사 무량수전	보토 이상(2003)	실측(2002)
	국보	제19호	영주 부석사 조사당	대량 이상(2005)	-
	국보	제223호	경복궁 근정전	하층 공포 이상(2003)	실측(2000)	월대 포함
	국보	제316호	완주 화암사 극락전	기둥 이상(2004)	-
3	국보	제49호	예산 수덕사 대웅전	번와 보수(2000)	실측(2005)
	국보	제67호	구례 화엄사 각황전	-	실측(2009)
	국보	제328호	예천 용문사 대장전과 윤장대	완전 해체(2004)	-	윤장대 포함 여부
	보물	제562호	경산 환성사 대웅전	평방 이상(2014)	-
4	국보	제50호	영암 도갑사 해탈문	대량 이상(2018)	실측(2005)
	국보	제55호	보은 법주사 팔상전	도리 이상(1968), 5층 상륜부 이상(2013)	실측(2013)	목탑
	보물	제180호	여주 신륵사 조사당	완전 해체(2016)	실측(2005)
	보물	제915호	보은 법주사 대웅보전	완전 해체(2005)
5	국보	제56호	순천 송광사 국사전	-	실측(2017)
	국보	제224호	경복궁 경회루	적심 이상(2000)	-	연지, 석물 포함
	국보	제304호	여수 진남관	완전 해체(2019)	실측(2001)	해체수리중
	보물	제263호	순천 송광사 하사당	완전 해체(2017)	실측(2007)
6	국보	제13호	강진 무위사 극락보전	공포이상(1982), 연목이상(2001)	실측(2011)	’21년 해체예정
	국보	제14호	영천 은해사 거조암 영산전	연목 이상(1997)	실측(2004)
	국보	제305호	통영 세병관	산자 이상(2000)	실측(2002)
	보물	제402호	수원 팔달문	하층 평방 이상(2013)	실측(1998)	성곽 포함
7	국보	제51호	강릉 임영관 삼문	전체 해체(2004)	-
	국보	제52호	합천 해인사 장경판전	산자 이상(1998)	실측(2002)	건물군
	국보	제62호	김제 금산사 미륵전	1층 연목 이상(2000)	-